Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 108-ра
"Об утверждении паспорта ведомственного проекта государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"
(вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов")	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 07.02.2025

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 108-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ"

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить паспорт ведомственного проекта "Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике.

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 108-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ"
_________________________________________________________
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год				
1.	Доля муниципальных образований, в которых полигоны твердых коммунальных отходов соответствуют нормативному состоянию, от общего количества муниципальных образований	ВП	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	процент	50	2023	70	-	-	-	-	Возрастающий	Да	ГИИС "Электронный бюджет"	

План достижения показателей ведомственного
проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Задача: Обеспечение населения объектами по захоронению твердых коммунальных отходов	
1.1.	Доля муниципальных образований, в которых полигоны твердых коммунальных отходов соответствуют нормативному состоянию, от общего количества муниципальных образований	ВП	процент	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год				
1.	Приведение полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством	Количество муниципальных образований, в которых полигоны твердых коммунальных отходов соответствуют нормативному состоянию	единица	10	10	14	-	-	-	-	Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области, связанных с приведением полигонов твердых коммунальных отходов в нормативное состояние	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля муниципальных образований, в которых полигоны твердых коммунальных отходов соответствуют нормативному состоянию, от общего количества муниципальных образований	

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 года	Прогнозный период 2028 года	
Ведомственный проект "Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов"	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	16488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		14707,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1780,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Приведение полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством"		16488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		14707,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1780,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Приведение полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14707,3	14707,3	
ИТОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14707,3	14707,3	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями
да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1	Задача: Обеспечение населения объектами по захоронению твердых коммунальных отходов	
1.1	Результат: Приведение полигонов твердых коммунальных отходов в соответствие с действующим законодательством	01.01.2024	20.12.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Отчет о достижении показателя результативности в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету	да		
1.1. К.1	Контрольная точка "Разработаны правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам"	-	26.02.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Проект НПА	нет	Отсутствует	
1.1. К.2	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам"	-	16.04.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Нормативный правовой акт	нет	Консультант Плюс	
1.1. К.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам"	-	15.02.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	нет	Отсутствует	
1.1. К.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	03.06.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Контракт (Муниципальный контракт)	да	ЕИС Закупки	
1.1. К.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам"	-	01.08.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Информационная справка Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	да	Отсутствует	
1.1. К.6	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Зайцев А.С.	-	-	16488,0	0,0	Акты выполненных работ	да	ЕИС Закупки